RELATÓRIO DE REFORMA E AMPLICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ-RN

OBJETIVO DA OBRA: reforma e ampliação do prédio sede da Câmara Municipal de São José do Seridó, para aumentar a capacidade do Plenário, dar melhores condições de acessibilidade aos usuários do serviço público e modernizar o prédio, alinhando sua imagem aos valores do ente público.

2020 – Antes da reforma

2022 – pós-reforma

CRONOGRAMA DE TRABALHO
Início das Obras: 18 de abril de 2022
Fim das Obras: 19 de dezembro de 2022
Etapas:
•	18 de abril a 06 de julho – Demolição da mureta e de algumas paredes, de acordo com o projeto arquitetônico, além de retiradas das janelas e portas antigas;
•	07 de julho a 30 de agosto – Construção da área ampliada, a qual se tornará o novo Plenário da Câmara;
•	01 de setembro a 30 de setembro – Instalação da parte elétrica, de água e esgotos;
•	01 de outubro a 02 de novembro – Instalação do piso e emassamento das paredes;
•	03 de novembro a 19 de dezembro – Aplicação do forro de gesso, serviço de pintura externa e interna, instalação das luzes, interruptores e tomadas, aplicação da louça sanitária e das pias, instalação das portas e janelas e do corrimão externo, instalação da marquise e dos letreiros;
•	20 de dezembro de 2022 – Inauguração do prédio pós-reforma.
ÁREA CONSTRUÍDA
O imóvel foi ampliado, apresentando uma área construída total de 142,00 m², dividida da seguinte forma:
Antes:	Depois:	
Recepção	Recepção	
Secretaria	Plenário	
Plenário	2 Banheiros	
Cozinha	Secretaria	
Banheiro	Gabinete da Presidência	
Corredor	Corredor	
	Arquivo	
	Almoxarifado	
	Depósito	

DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM A REFORMA
A reforma e ampliação do prédio foi viabilizada em parceria entre a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal de São José do Seridó, comprometendo-se esta última a destinar à reforma as sobras do duodécimo dos exercícios 2021 e 2022, que lhe foram devolvidos ao final de cada exercício. 
Além disso, a citada reforma contou com os seguintes investimentos realizados diretamente pela Câmara Municipal:
PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	VALOR	
DISPENSA n.º 012/2022	Forro em gesso – 55m	R$ 1.650,00	
	Sancas em gesso – 126m	R$ 3.780,00	
DISPENSA n.º 013.2022	Letreiro externo da frente do prédio em caixa alta, medindo 3,55x0,76m, com pintura na cor preta e instalação no local.	R$ 1.996,00	
	Letreiro externo da lateral do prédio em caixa alta, medindo 4,18x1,00m, com pintura na cor preta e instalação no local.	R$ 2.646,00	
	Letreiro interno em aço polido caixa alta, medindo 3,00x0,41m e instalação no local.	R$ 2.810,00	
	Marquise com estrutura metálica e revestimento em ACM, medindo 2,80x0,70x0,30m e instalação no local.	R$ 2.376,00	
DISPENSA n.º  015/2022	02 janelas em vidro temperado incolor 8mm com medidas 1,50 x 0,50	R$ 698,00	
	Janelas em vidro temperado incolor 8mm com medidas 1,98 x 0,50.	R$ 470,00	
	Janelas em vidro temperado incolor 8mm com medidas 2,00 x 0,50	R$ 472,00	
	Porta em vidro temperado incolor 10mm com mola hidráulica e puxador eixo 30 incluso com medidas 1,42 x 2,38.	R$ 2.069,00	
	Porta em vidro temperado incolor 10mm com mola puxador eixo 30 incluso com medidas 2,94 x 2,40	R$ 3.690,00	
	Porta em vidro temperado incolor 10mm com mola puxador eixo 30 incluso com medidas 2,01 x 2,40.	R$ 2.522,00	
	Bandeirola fume 8mm (para porta já existente) com medidas 1,40 x 0,50.	R$ 330,00	
	Mola hidráulica e puxador eixo 30(para porta já existente).	R$ 685,00	
	Tubo em alumínio (para porta já existente).	R$ 190,00	
DISPENSA n.º 017/2022	Confecção de guarda corpo com corrimão de acessibilidade, medindo 6.37m, em inox 304 de 1 ½ polegadas	R$ 3.000,00	
DISPENSA n.º 018/2022	Serviço de mão de obra para pintura do prédio da Câmara Municipal de São José do Seridó -Aprox. 564 m²	R$ 6.304,73	
TOTAL GASTO	R$ 35.688,73